НАЦЫЯНАЛЬНЫ
СТАТЫСТЫЧНЫ КАМІТЭТ
РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ
(Белстат)		НАЦИОНАЛЬНЫЙ
СТАТИСТИЧЕСКИЙ КОМИТЕТ
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
(Белстат)	
ПАСТАНОВА		ПОСТАНОВЛЕНИЕ	
18 января 2018 г.	№	5	
г. Мiнск		г. Минск	

Об утверждении календарного плана мероприятий по подготовке и проведению переписи населения Республики Беларусь 2019 года	

На основании статей 15 и 16 Закона Республики Беларусь от 13 июля 2006 года «О переписи населения», подпункта 8.10 пункта 8 Положения 
о Национальном статистическом комитете Республики Беларусь, утвержденного Указом Президента Республики Беларусь от 26 августа 2008 г. № 445 «О некоторых вопросах органов государственной статистики», Национальный статистический комитет Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Утвердить прилагаемый календарный план мероприятий по подготовке и проведению переписи населения Республики Беларусь 
2019 года.

Председатель	И.В.Медведева

УТВЕРЖДЕНО
Постановление
Национального 
статистического комитета Республики Беларусь
18.01.2018 № 5

Календарный план мероприятий по подготовке и проведению 
переписи населения Республики Беларусь 2019 года

№
п/п	Наименование мероприятия	Срок 
исполнения	Ответственные за
исполнение	
1. Правовое обеспечение	
1.1.	подготовка и внесение на рассмотрение в Правительство Республики Беларусь проекта постановления Совета Министров Республики Беларусь «Об утверждении программы переписи населения Республики Беларусь 
2019 года»	до 20 июля 
2018 г.	Белстат	
1.2.	разработка и утверждение:			
1.2.1.	форм переписной документации и указаний по их заполнению	до 20 июля 
2018 г.	Белстат	
1.2.2.	порядка работы с программным обеспечением, установленным на планшетные компьютеры:
для работы регистраторов

для проведения опроса временным переписным персоналом	

до 1 августа 
2018 г.

до 19 июля 2019 г.	Белстат	
1.2.3.	указаний территориальным органам государственной статистики об организации работы по  формированию обобщенных данных о численности населения	до 1 августа
2018 г.	Белстат	
1.2.4.	основных методологических и организационных положений проведения переписи населения Республики Беларусь 2019 года	до 3 сентября
2018 г.	Белстат	
1.2.5.	технологии обработки персональных данных переписи населения Республики Беларусь 2019 года	до 10 сентября 
2018 г.	Белстат	
1.2.6.	программы формирования итоговых данных переписи населения Республики Беларусь 2019 года	до 7 декабря 2018 г.	Белстат	
1.2.7.	указаний по составлению организационного плана проведения переписи населения Республики Беларусь 2019 года

	до 31 декабря
2018 г.	Белстат	
1.3.	подготовка и согласование с Белстатом указаний по проведению переписи отдельных категорий населения	до 31 декабря 2018 г.	МВД, Минобороны, МИД, КГБ, МЧС, Госпогранкомитет, Минздрав, Минобразование, Минтруда и соцзащиты, Уполномоченный по делам религий и национальностей	
2. Организационные мероприятия	
2.1.	уточнение перечня и границ населенных пунктов, инициирование при необходимости изменения административно-территориального устройства (включая изменение границ населенных пунктов и упразднение сельских населенных пунктов), подготовка и внесение в установленном порядке документов, необходимых для регистрации и учета административно-территориальных, территориальных единиц и изменений административно-территориального устройства	до 1 марта 
2018 г.	местные исполнительные и распорядительные органы	
2.2.	предоставление Белстату информации из реестра адресов Республики Беларусь и единого реестра административно-территориальных и территориальных единиц Республики Беларусь, необходимой для подготовки и проведения переписи населения Республики Беларусь 2019 года	до 1 июня 
2018 г.
до 3 июня 
2019 г.	Госкомимущество	
2.3.	предоставление по запросу Белстата персональных данных из регистра населения в составе и объеме, необходимых для подготовки и проведения переписи населения Республики Беларусь 2019 года	до 1 июня 
2018 г.
до 3 июня 
2019 г.	МВД	
2.4.	предоставление Белстату информации о ходе работ по упорядочению названий улиц, нумерации домов и квартир в городах, поселках городского типа и крупных сельских населенных пунктах	ежеквартально в течение 2018 г.	главные статистические управления областей и города Минска	
2.5.	проведение совещания по вопросу подготовки и проведения переписи населения Республики Беларусь 2019 года с руководящими работниками и специалистами территориальных органов государственной статистики	III квартал 
2018 г.	Белстат	
2.6.	привлечение регистраторов из числа работников организаций, осуществляющих эксплуатацию жилищного фонда и (или) предоставляющих жилищно-коммунальные услуги	до 28 сентября 2018 г.	Минжилкомхоз, местные исполнительные и распорядительные органы на территории района, города (района в городе Минске)	
2.7.	проведение обучения порядку составления списков домов и помещений в них в городах, поселках городского типа и крупных сельских населенных пунктах (далее – проверка адресного хозяйства) регистраторами:			
2.7.1.	заместителей начальников Главных управлений – начальников отделов демографической статистики и переписи населения главных статистических управлений областей и города Минска	до 5 октября 2018 г.	Белстат	
2.7.2.	начальников отделов статистики в районах и городах	до 17 октября 2018 г.	главные статистические управления областей	
2.8.	утверждение состава регистраторов для проверки адресного хозяйства по представлению руководителя соответствующего местного исполнительного и распорядительного органа	до 25 октября 
2018 г.	главные статистические управления областей и города Минска	
2.9.	проведение обучения регистраторов порядку проверки адресного хозяйства	до 5 ноября 
2018 г.	главные статистические управления областей и города Минска, отделы статистики в районах и городах	
2.10.	выдача удостоверений и переписного инструментария регистраторам	до 6 ноября 
2018 г.	главные статистические управления областей и города Минска, отделы статистики в районах и городах	
2.11.	проверка регистраторами адресного хозяйства	6 – 30 ноября 
2018 г.	регистраторы	
2.12.	обеспечение безопасности временного переписного персонала при подготовке и проведении переписи населения Республики Беларусь 2019 года (по согласованию с органами государственной статистики):			
2.12.1.	регистраторов	ноябрь 2018 г.	МВД	
2.12.2.	переписчиков	октябрь 2019 г.	МВД	
2.13.	составление списков сельских населенных пунктов по выверенным данным документов похозяйственного учета	до 1 января 
2019 г.	местные исполнительные и распорядительные органы	
2.14.	формирование обобщенных данных о численности населения:			
2.14.1.	по району (городу)	до 2 января 
2019 г.	отделы статистики в 
районах и городах, главные статистические управления областей	
2.14.2.	по области (городу Минску)	до 21 января 2019 г.	главные статистические управления областей и города Минска
	
2.14.3.	по республике	до 15 февраля 2019 г.	Белстат	
2.15.	проведение обучения по составлению организационного плана проведения переписи населения Республики Беларусь 2019 года:			
2.15.1.	заместителей начальников Главных управлений – начальников отделов демографической статистики и переписи населения главных статистических управлений областей и города Минска	до 11 апреля 2019 г.	Белстат	
2.15.2.	начальников отделов статистики в районах и городах	до 22 апреля 2019 г.	главные статистические управления областей	
2.16.	составление и утверждение организационного плана проведения переписи населения Республики Беларусь 2019 года 	до 17 июня 
2019 г.	отделы статистики в 
районах и городах, главные статистические управления областей и города Минска, Белстат	
2.17.	обеспечение главных статистических управлений областей и города Минска переписным инструментарием:			
2.17.1.	планшетными компьютерами	до 1 августа
2019 г.	Белстат	
2.17.2.	бланками удостоверений временного переписного персонала	до 1 августа
2019 г.	Белстат	
2.18.	проведение обучения по вопросам подготовки и проведения переписи населения Республики Беларусь 2019 года:			
2.18.1.	руководящих работников Белстата	до 6 августа 
2019 г.	Белстат	
2.18.2.	заместителей начальников Главных управлений – начальников отделов демографической статистики и переписи населения и специалистов структурных подразделений главных статистических управлений областей и города Минска	до 13 августа 
2019 г.	Белстат	
2.18.3.	начальников и специалистов структурных подразделений главных статистических управлений областей и города Минска, начальников отделов статистики в районах и городах	до 23 августа 
2019 г.	главные статистические управления областей и города Минска	
2.19.	подбор временного переписного персонала в количестве, необходимом для подготовки и проведения переписи населения Республики Беларусь 
2019 года	до 1 сентября 2019 г.	местные исполнительные и распорядительные органы	
2.20.	утверждение состава временного переписного персонала по представлению руководителя соответствующего местного исполнительного и распорядительного органа	до 16 сентября 2019 г.	главные статистические управления областей и города Минска	
2.21.	обеспечение отделов статистики в районах и городах переписным инструментарием	до 16 сентября
2019 г.	главные статистические управления областей	
2.22.	проведение обучения по вопросам проведения переписи населения Республики Беларусь 2019 года:			
2.22.1.	заведующих переписными участками и их помощников	до 19 сентября 2019 г.	главные статистические управления областей и города Минска, отделы статистики в районах и городах	
2.22.2.	переписчиков	до 30 сентября 2019 г.	главные статистические управления областей и города Минска, отделы статистики в районах и городах	
2.23.	организация на безвозмездной основе предоставления помещений для организации работы временного переписного персонала, оборудованных средствами связи, соответствующих установленным требованиям технических нормативных правовых актов, в том числе системы противопожарного нормирования и стандартизации, имеющих условия для работы и хранения переписных листов и иной переписной документации, а также предоставления необходимого оборудования и транспортных средств для организации работы временного переписного персонала	16 сентября – 
20 ноября 
2019 г.	местные исполнительные и распорядительные органы	
2.24.	обеспечение временному переписному персоналу бесплатного проезда по предъявлении соответствующего удостоверения в пределах района, города областного подчинения, 
г. Минска, в котором они проводят перепись населения, на автомобильном транспорте общего пользования, осуществляющем городские и пригородные автомобильные перевозки пассажиров в регулярном сообщении (за исключением перевозок автомобилями-такси), городском электрическом транспорте и в метрополитене, на железнодорожном транспорте общего пользования в поездах региональных линий эконом-класса, осуществляющем пригородные перевозки пассажиров в регулярном сообщении, без последующего возмещения из средств республиканского и местных бюджетов расходов, понесенных транспортными организациями в связи с предоставлением данной льготы	23 сентября –
13 ноября 
2019 г.	Минтранс, местные исполнительные и распорядительные органы	
2.25.	распределение временного переписного персонала по участкам работы:			
2.25.1.	заведующих переписными участками и их помощников	до 30 сентября 2019 г.	главные статистические управления областей и города Минска, отделы статистики в районах и городах	
2.25.2.	переписчиков	до 3 октября 2019 г. 	главные статистические управления областей и города Минска, отделы статистики в районах и городах	
2.26.	выдача удостоверений временного переписного персонала и переписного инструментария переписчикам	до 3 октября 2019 г.	главные статистические управления областей и города Минска, отделы статистики в районах и городах	
2.27.	создание стационарных переписных участков	до 4 октября 2019 г.	главные статистические управления областей и города Минска, отделы статистики в районах и городах	
2.28.	обеспечение проведения переписи населения Республики Беларусь 2019 года	4 – 30 октября 2019 г.	Белстат, МВД, Минобороны, МИД, КГБ, МЧС, Госпогранкомитет, Минздрав, Минобразование, Минтруда и соцзащиты, Уполномоченный по делам религий и национальностей, главные статистические управления областей и города Минска	
2.29.	обеспечение координации деятельности учреждений высшего и среднего специального образования по организации образовательного процесса с учетом освобождения от учебы обучающихся, получающих высшее и среднее специальное образование в очной форме получения образования, для участия в подготовке и проведении переписи населения Республики Беларусь 2019 года	октябрь – ноябрь 2019 г.	Минобразование	
2.30.	проведение контрольных обходов	до 5 ноября 
2019 г.	главные статистические управления областей и города Минска, отделы статистики в районах и городах	
2.31.	передача планшетных компьютеров в Белстат	ноябрь 2019 г.	главные статистические управления областей и города Минска	
2.32.	подготовка проекта доклада Президенту Республики Беларусь о проведении переписи населения Республики Беларусь 2019 года	до 15 января 2020 г.	Белстат	
2.33.	предоставление пользователям: 			
2.33.1.	предварительных итоговых данных переписи населения Республики Беларусь 2019 года о численности населения с распределением на городское и сельское, по полу, по республике, областям и городу Минску	до 3 февраля 
2020 г.	Белстат	
2.33.2.	основных итоговых данных переписи населения Республики Беларусь 2019 года о численности населения по республике, областям и городу Минску с распределением по полу, возрасту, национальности, языку, образованию, состоянию в браке, источникам средств существования	до 1 июня 
2020 г.	Белстат	
2.33.3.	итоговых данных о сельскохозяйственной деятельности домохозяйств	до 1 июля 
2021 г.	Белстат	
2.34.	публикация итогов переписи населения Республики Беларусь 2019 года	2020 – 2021 гг.	Белстат, главные статистические управления областей и города Минска	
3. Информационно-разъяснительная работа	
3.1.	разработка логотипа и лозунга переписи населения Республики Беларусь 2019 года	до 28 сентября 2018 г.	Белстат	
3.2.	широкое освещение в средствах массовой информации подготовки и проведения переписи населения Республики Беларусь 2019 года 	постоянно в период подготовки и проведения переписи населения Республики Беларусь 
2019 года	Белстат, Мининформ, Белтелерадиокомпания, главные статистические управления областей и города Минска	
3.3.	проведение информационно-разъяснительной работы среди коллективов работников по вопросам программы переписи населения Республики Беларусь 2019 года, обязанностей граждан, порядка и сроков сбора персональных данных, мер по их защите, хода работ по подготовке и проведению переписи населения Республики Беларусь 
2019 года 	постоянно в период подготовки и проведения переписи населения Республики Беларусь 
2019 года	Белстат	
3.4.	обеспечение производства социальной рекламы по вопросам подготовки и проведения переписи населения Республики Беларусь 2019 года, а также информационных сообщений и (или) материалов о подготовке и проведении переписи населения Республики Беларусь 2019 года	май 2019 г.	Белстат, главные статистические управления областей и города Минска	
3.5.	определение на территории соответствующих населенных пунктов мест, наиболее посещаемых гражданами, для размещения информационных сообщений и (или) материалов о подготовке и проведении переписи населения Республики Беларусь 2019 года, предоставленных органами государственной статистики	до 31 мая 2019 г.	местные исполнительные и распорядительные органы	
3.6.	размещение работниками организаций, осуществляющих эксплуатацию жилищного фонда и (или) предоставляющих жилищно-коммунальные услуги, на досках объявлений у подъездов жилых домов информационных сообщений и (или) материалов о подготовке и проведении переписи населения Республики Беларусь 2019 года, предоставленных органами государственной статистики	3 июня –
30 октября 
2019 г.	Минжилкомхоз, местные исполнительные и распорядительные органы	
3.7.	размещение (распространение) на безвозмездной основе социальной рекламы по вопросам подготовки и проведения переписи населения Республики Беларусь 2019 года, а также информационных сообщений и (или) материалов о подготовке и проведении переписи населения Республики Беларусь 2019 года, предоставленных органами государственной статистики, на щитовых конструкциях, информационных стендах	3 июня –
30 октября 
2019 г.	местные исполнительные и распорядительные органы	
3.8.	организация на безвозмездной основе рассылки абонентам услуг сотовой подвижной электросвязи СМС-сообщений информационно-разъяснительного характера о подготовке и проведении переписи населения Республики Беларусь 
2019 года, содержание которых определяется органами государственной статистики	30 сентября –
30 октября 
2019 г.	Минсвязи	
4. Автоматизация процессов подготовки и проведения переписи населения Республики Беларусь 2019 года	
4.1.	организация создания системы переписи населения	август 2017 – май 2019 гг.	Белстат	
4.2.	проектирование, создание и аттестация системы защиты информации системы переписи населения	август 2017 – июнь 2019 гг.	Белстат	
4.3.	масштабирование подсистемы сбора и передачи данных и системы защиты информации системы переписи	до 1 октября 2018 г.
до 1 августа 2019 г.	Белстат	
4.4.	обновление данных, содержащихся в реестре адресов географической информационной системы «Перепись населения»	июнь 2018 г.
июнь 2019 г.	Белстат	
4.5.	формирование картографического материала для работы регистраторов	до 1 октября 2018 г.	Белстат, главные статистические управления областей и города Минска	
4.6.	апробация технологии автоматизированной обработки персональных данных переписи населения Республики Беларусь 
2019 года	май 2019 г.	Белстат	
4.7.	автоматизация процессов составления организационного плана проведения переписи населения Республики Беларусь 2019 года	март 2019 г.	Белстат	
4.8.	формирование картографического материала для работы временного переписного персонала	август 2019 г.	Белстат, главные статистические управления областей и города Минска	
4.9.	модернизация программного обеспечения Системы доступа к итоговым данным переписи населения Республики Беларусь через глобальную компьютерную сеть Интернет	ноябрь 2019 – май 2020 гг.	Белстат	
5. Финансовое и материально-техническое обеспечение	
5.1.	подготовка сметы расходов, необходимых для выполнения мероприятий по подготовке и проведению переписи населения Республики Беларусь 2019 года, и предоставление в Минфин для включения в проект республиканского бюджета на 2019 финансовый год	до 29 июня 
2018 г.	Белстат	
5.2.	осуществление закупок товаров (работ, услуг), необходимых для подготовки и проведения переписи населения Республики Беларусь 2019 года, формирования ее итогов	2018 – 2020 гг.	Белстат